공주시 고시 제2023 - 189호

공주시 중학동 도시재생 활성화계획 변경 고시

도시재생활성화지역으로 지정된 공주시 중학동 일원에 대하여 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제20조 제10항 및 같은법 시행령 제28조에 따라 도시재생 활성화계획을 변경 고시합니다.

2023년  12월 01일

공 주 시 장

1. 도시재생 활성화계획의 개요(변경)

1) 계획의 개요

사 업 명	유 형	위 치	면적(㎡)	비 고
제민천과 함께하는 역사문화 골목공동체 뉴딜사업	중심시가지형	공주시 중동 147번지 일원	138,456

2) 사 업 기 간 : 2019년 6월 ~ 2024년 12월 (6년간)

3) 사업시행자 : 공주시장

4) 총 사 업 비 : 539.22억원(국비 113.4, 지방비 80.6 / 부처연계 280 / 자체시비 65.22)

【활성화계획도】

2. 계획의 세부내용(변경)

1) 도시재생 활성화계획의 내용

- 비전 : 제민천과 함께하는 역사문화 골목공동체 뉴딜사업

- 목표 : 주민복지 및 삶의 질 향상, 도시활력회복, 일자리창출, 공동체 회복 및 사회통합

2) 도시재생사업의 계획(변경)

- 마중물사업[194억원(국비 113.4, 지방비 80.6)]

구 분		사업비(백만원)		사업주체	주요내용
		당초	변경
혁신 거점 공간 조성 사업	마을 어울림 플랫폼 조성	4,000	5,500	공주시, 국토부	주민공동체 거점공간 조성
	제민천 창업 혁신 플랫폼 조성	1,500	-	공주시, 국토부	일자리창출 거점공간 조성
	공주 컬처라운지 플랫폼 조성	1,000	1,000	공주시, 국토부	유·무형 지역문화자산 거점공간 조성
	나태주 문학창작 플랫폼 조성	3,500	4,000	공주시, 국토부	문학활성화 거점공간 조성
	제민천 역사문화광장 조성 사업	2,800	1,500	공주시, 국토부	주민교류활동 중심광장 조성
	공주 창의놀이터 조성 사업	3,800	-	공주시, 국토부	주민교류 및 복합거점공간 조성
지역 특화 재생 사업	숙박시설 및 상업시설 매력화사업	1,500	-	공주시, 국토부	숙박 및 상업시설 리모델링 사업 지원
	루치아 골목길 특화사업	300	300	공주시, 국토부	특화골목조성 및 보행환경정비
	제민천 프롬나드 조성	2,000	2,000	공주시, 국토부	가로경관 정비 및 지역자연자원활성화
	나태주 골목길 상징화 사업	200	200	공주시, 국토부	문학특화 가로조성 및 문학공동체 형성
	나태주 문학 활성화 프로그램	200	200	공주시, 국토부	문화·예술특화 프로그램 운영
지역 역량 강화 사업	공주 야행 골목길 활성화사업	2,000	2,000	공주시, 국토부	야간경관 특화거리 조성 및 상권활성화
	상권활성화 프로그램 사업	400	400	공주시, 국토부	상업시설 리모델링 및 디자인컨설팅
	주민역량강화 및 주민공모사업	200	200	공주시, 국토부	주민공동체 활성화 기반 구축
	상인역량강화 및 경영지원사업	300	300	공주시, 국토부	상인공동체 활성화 기반 구축
	우리동네 매력화 사업	1,800	1,800	공주시, 국토부	도시환경매력화 및 공동체활성화

- 자체사업(65.22억원)

구 분	사업비(백만원)		사업주체	주요내용
	당초	변경
마을 어울림 플랫폼 조성	272	2,122	공주시, 국토부	주민공동체 거점공간 조성
공주 컬처라운지 플랫폼 조성	1,000	1,500	공주시, 국토부	유·무형 지역문화자산 거점공간 조성
공주 창의놀이터 조성 사업	400	-	공주시, 국토부	주민교류 및 복합거점공간 조성
나태주 문학창작 플랫폼 조성	-	2,900	공주시, 국토부	문학활성화 거점공간 조성

- 부처협력사업(280억원)

구 분	사업비(백만원)		사업주체	주요내용
	당초	변경
대통사지 실체회복사업	6,700	6,700	공주시, 문화재청	대통사지 발굴 및 역사공원 조성
감영터 일대 고도골격 복원사업	1,600	1,600	공주시, 문화재청	옛 역사지 복원 및 랜드마크 조성
고도이미지 찾기사업 (한옥지원, 담장정비 등)	6,000	8,400	공주시, 문화재청	간이한옥 및 한옥풍 건축물 정비
제민천변 역사문화역량강화사업 (전선지중화)	4,000	4,000	공주시, 문화재청	전선지중화 및 가로경관 정비
제민천변 역사문화역량강화사업 (교량리모델링)	6,000	6,000	공주시, 문화재청	교량 리모델링 및 도시경관 개선
주민주도형 골목경제 활성화사업	1,300	1,300	공주시, 행안부	역사문화콘텐츠활용 특화거리조성

3) 마중물사업 단계별 재원투입계획 및 예산집행계획(변경)

계	단계별 재원투입계획 및 예산집행계획(백만원)
	2019.하~2020.상	2020.하~2021.상	2021.하~2022.상	2022.하~2023.상	2023하~2024.하
19,400	1,628	4,665	3,979	7,678	1,450

※ 재원투입계획 및 예산집행계획은 사업계획 변경 등에 따라 변경될 수 있음

3. 파급효과 및 성과지표

- 거버넌스 : 주민협의체 회의 운영 횟수, 주민공모사업 운영 건수 등

- 주거복지 삶의 질 향상 : 주민활용 실내공간 면적, 주차장 보급 대수, 도로 정비 건수 등

- 도시활력 회복 : 관광객 수, 창업 점포수, 전시 및 공연·축제 개최 건수 등

- 일자리 창출 : 일자리 창출 인원수, 상인/청년 창업자 역량강화 교육 건수 등

- 공동체 회복 및 사회통합 : 주민조직수, 상인조직수, 지역공동체 공간 조성 등

- 지자체 자체지표 : 주민설명회 등 홍보 건수, 문화 예술관련 시설 정비 및 조성 건수 등

4. 도시재생기반시설의 설치․정비에 관한 계획(변경)

구 분		사업명	위 치	사 업 비	규 모	사업기간
문화 시설	당초	마을 어울림 플랫폼 조성	공주시 반죽동 5-16 일대	36억원 (국비 21.6억, 지방비 14.4억)	지하1층~ 지상2층	2019 ~2024
	변경			76.22억원 (국비 33억, 43.22억)
문화시설	당초	나태주 문학창작 플랫폼 조성	공주시 반죽동 334-2 일대	35억원 (국비 21억, 지방비 14억)	지하1층~ 지상2층	2019 ~2024
	변경			69억원 (국비 21억, 지방비 48억)
문화 시설	당초	제민천 창업혁신 플랫폼 조성	공주시 반죽동 218 일대	15억원 (국비 9억, 지방비 6억)	지상2층	삭제
	변경			-
문화시설	당초	공주 창의놀이터 조성	공주시 반죽동 333-1 일대	42억원 (국비 25억, 17억)	지하1층~ 지상2층	삭제
	변경			-

※ 문화시설 : 2개소 변경 (마을 어울림 플랫폼 조성, 나태주 문학창작 플랫폼 조성)
2개소 삭제 (제민천 창업 혁신 플랫폼 조성, 공주 창의놀이터 조성)

5. 행위 제한 적용지역 : 해당 사항 없음

6. 도시재생사업의 평가 및 점검계획

1) 정량적 평가 : URMS(Urban Regeneration Monitoring System)활용 모니터링

2) 정성적 평가 : 외부평가 자문단 구성(공주시, 공주시 도시재생지원센터)

7. 도시재생 관련 조직의 운영 및 활성화 방안

1) 도시재생 전담조직

- 의사결정권자로서 참여하여 관계부서 및 기관협의의 총괄 역할 수행

2) 도시재생 추진단

- 도시재생사업 추진 관련 행정적 지원을 담당하고 뉴딜사업 전담

3) 도시재생 행정협의회

- 다양한 세부사업과의 연계·조정 시에 각 분야 간 협업을 위한 상시 의사결정 체계로서의 역할 수행

4) 중학동 주민협의체

- 2013년부터 구축된 양질의 공동체 자산 활용

- 주민, 상인 등의 역량을 강화하고 결정된 사항에 대해 주민, 상인 등의 공감대와 참여 유도

5) 도시재생지원센터 및 도시재생현장지원센터

- 민간과 행정의 협력적 의사결정을 위한 시스템을 운영, 지원

- 도시재생활성화계획의 방향, 지역의 여건, 현안문제의 우선순위, 실현가능성 등을 검토하여 주민 의견수렴과 관련 사업 추진 지원 등 지자체와 주민 간 가교역할

6) 중학동 도시재생사업 사업추진협의회

- 주민설명회, 간담회, 워크숍 등의 소통 과정에서 의견을 제시하고 제시된 의견은 해당 도시재생활성화지역의 여건, 재생 목표, 현안문제의 우선순위, 실현 가능성 등을 고려하여 계획 반영 여부를 결정

8. 관련서류 열람(고시일로부터 30일간)

시민의 열람 편의를 위하여 공주시 도시재생과(☎041-840-8658)에 관련도서를 비치하고 있습니다.